بسم الله الرحمن الرحيم  » « 

ريز متره 

بخش اول

1-1 مقدمه

         پروژه ي مورد نظر شامل يک دستگاه آپارتمان مسکوني چهار طبقه ( سه طبقه روي پيلوت ) است . اين ساختمان در شهر رشت اجرا شده براي آن اسکلت بتن ارمه در نظر گرفته شده است .
        
        شروع پروژه در تاريخ 17 شهريور ماه 1380 .

       مبناي متره فهرست بهاي 1379 در نظر گرفته شده است . همچنين شاخصهاي دوره مبنا وانجام کار به ترتيب سه ماهه ي چهارم سال 1378 و سه ماهه ي سوم سال 1379 مي باشن . ضريب بالاسري 30% در نظر گرفته شده است .  

	

بخش دوم - عمليات خاکبرداري با دست

2-1  مقدمه
     پي در عمق دو متري زير زمين اجرا مي شود . زمين 60% نرم بيلي و40% دج (سخت) است . 80% عمليات خاکبرداري با ماشين وبقيه با دست انجام ميشود .
              زمين به شکل ذوزنقه است که ابعاد آن دردو ضلع شرقي وغربي برابر 45/9 متر در ضلع شمالي 10 متر ودر ضلع جنوبي 55/10 متر است ( در پي و با احتساب حاشيه ي اضافي جهت اجراي فنداسيون ) .

مساحت خاکبرداري کل = 1/97 متر مربع
خاکبرداري دستي = 20% کل خاکبرداري = 4/19 متر مربع
خاکبرداري ماشيني = 80% کل خاکبرداري =7/77 متر مربع

شرح عمليات :
    خاکبرداري پي کني گود برداري و کانال کني در زمين هاي نرم تا عمق دو متر و ريختن خاکهاي کنده شده به کنار محلهاي مربوطه .
     شماره فهرست بها  :  020102 
     
	واحد : متر مکعب		
ملاحظات	حجم کلي	حجم جزئي	سطح مربوط به هر مورد	مساحت کل	تعداد قسمت هاي مشابه	رديف	
	23.28	23.28	11.64	19.4	1	1	
                                                                                                                                   جمع کل : 28/23 متر مکعب      

شرح عمليات :
خاکبرداري  پي کني  گود برداري و کانال کني در زمين هاي سخت تا عمق دو متر وريختن خاکهاي کنده شده به کنار محلهاي مربوطه .
شماره فهرست بها :  020103
	واحد : متر مکعب		
ملاحظات	حجم کلي	حجم جزئي	سطح مربوط به هر مورد	مساحت کل	تعداد قسمت هاي مشابه	رديف	
	15.52	15.52	7.76	19.4	1	1	
                                                                                                                                                                                                جمع کل : 52/15 متر مکعب

بخش سوم- عمليات خاکي با ماشين 

شرح عمليات :
خاکبرداري در زمين هاي نرم با هر وسيله مکانيکي حمل مواد حاصل از خاکبرداري تا فاصله 20 متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن .
شماره فهرست بها :  030103

	واحد : متر مکعب		
ملاحظات	حجم کلي	حجم جزئي	سطح مربوط به هر مورد	مساحت کل	تعداد قسمت هاي مشابه	رديف	
	93.24	93.24	46.62	77.7	1	1	
                                                                                                                                    جمع کل : 24/93 متر مکب

شرح عمليات : 
خاکبرداري در زمين هاي سخت با هر وسيله ي مکانيکي حمل مواد حاصل از خاکبرداري تا فاصله 20 متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن .
شماره فهرست بها :  030104

	واحد : متر مکعب		
ملاحظات	حجم کلي	حجم جزئي	سطح مربوط به هر مورد	مساحت کل	تعداد قسمت هاي مشابه	رديف	
	62.16	62.16	31.08	77.7	1	1	
                                                                                                                                                                               جمع کل : 16/62 متر مکعب

بخش چهارم- قالب بندي چوبي

قالب بندي پي 

شرح عمليات :
تهيه وسايل قالب بندي با استفاده از تخته نراد خارجي در پي ها وشناژ هاي مربوط به آن .
شماره فهرست بها :  050101

	واحد : متر مربع		
ملاحظات	کلي	جزئي	ارتفاع	عرض	طول	تعداد قسمت هاي مشابه	شرح عمليات	رديف	
	25.64	25.64	.60	-	39.45	
1
	محيط پيرامون	
1

4.48
5.59
5.3
5.96
6.73
5.26	
4.48
5.59
5.3
5.96
6.73
5.26	
.60
.60
.60
.60
.60
.60	

-
-
-
-
-
-
	
7.46
9.32
8.84
9.94
11.22
8.76	
1
1
1
1
1
1	مستطيل هاي خالي بين پي ها از بالا سمت چپ به صورت ساعتگرد	
2
	
                                                                                                                                    جمع کل : 96/ 58 متر مربع                      

قالب بندي ستونها

شرح عمليات :
تهيه ي وسايل قالب بندي با استفاده از تخته ي نراد خارجي در ستونها و شناژهاي قائم با مقطع چهار ضلعي تا ارتفاع حداکثر 5/3 متر .
شماره فهرست بها :  050301

	واحد : متر مربع		
ملاحظات	کلي	جزئي	ارتفاع	عرض	طول	تعداد قسمت هاي مشابه	شرح عمليات	رديف	
	14.56	3.64	2.6	.35	.35	4	ستونهاي  )c1(
در طبقه ي همکف
( متصل به پي)	
1
	
	17.14	4.28	
3.06
	
35
	.35	4	ستونهاي  )c1(
در طبقه ي اول
	
2
	
	29.38	3.67	3.06	.3	.3	
8
	ستونهاي  )c1(
در طبقه ي دوم و سوم	
3
	
	14.56	3.64	2.6	.35	.35	
4
	ستونهاي  )c2(
در طبقه ي همکف
( متصل به پي)	
4
	
	17.14	4.28	3.06	.35	.35	
4
	ستونهاي  )c2(
در طبقه ي اول
	5	
	29.38	3.67	3.06	.3	.3	
8
	ستونهاي  )c2(
در طبقه ي دوم و سوم	6
	
	14.56	3.64	2.6	.35	.35	
4
	ستونهاي  )c3(
در طبقه ي همکف
( متصل به پي)	7
	
	17.14	4.28	3.06	.35	.35	4	ستونهاي  )c3(
در طبقه ي اول
	
8
	
	29.38	3.67	3.06	.3	.3	
8
	ستونهاي  )c3(
در طبقه ي دوم و سوم	9
	
                                                                                                                                     جمع کل :  2/183 متر مربع              

قالب بندي تير ها 

تذ کر :  لازم به ذکر است که منظور از ارتفاع وعرض سطح مقطع تير ومنظور از طول امتداد تير است . در قالب بندي تير ها بالاي تير جهت بتن ريزي باز خواهد ماند .

شرح عمليات :
تهيه ي وسايل و قالب بندي با استفاده از تخته نراد خارجي در تير هاي بتني تا ارتفاع حداکثر 5/3 متر .
شماره فهرست بها :  050501

	واحد : متر مربع		
ملاحظات	کلي	جزئي	ارتفاع	عرض	طول	تعداد قسمت هاي مشابه	شرح عمليات	رديف	
	27.6	2.3	.35	.3	2.3	12	تير هاي افقي در رديفهاي 1و2و3 بين محور هاي
BوA
در چهار سقف	1
	
	42
	3.5
	.35
	.3
	3.5
	12
	تير هاي افقي در رديفهاي 1و2و3 بين محور هاي
BوC
در چهار سقف	2	
	36
	3
	.35
	.3
	3
	12
	تير هاي افقي در رديفهاي 1و2و3 بين محور هاي
CوD
در چهار سقف	3
	
	68.8
	4.3
	.35
	.3
	
4.3

	16
	تير هاي افقي در محورهاي
AوBوCوD
بين رديفهاي
1و2در چهار سقف	4
	
	59.2
	3.7
	.35
	.3
	3.7
	16
	تير هاي افقي در محورهاي
AوBوCوD
بين رديفهاي
3و2در چهار سقف	5
	
                                                                                                                                  جمع کل : 6/233 متر مربع 

بسمه تعالي

تاريخ :     
شماره :     
دستورکار

بدينوسيله به اطلاع پيمانکار پروژه ي جاري مي رساند که عمليات قالب بندي پي و شناژهاي ساختمان قالب بندي ستونهاي طبقات و قالب بندي تيرها در تمام طبقات مي بايست با قالبهاي چوبي از چوب نراد خارجي صورت گيرد .

امضا : مهندسين مشاور آمايش

بسمه تعالي

تاريخ :     
شماره :     
صورت جلسه ي کارگاهي

در پي دستور کار ناظر پروژه مقيم کارگاه مهندسين مشاور آمايش عمليات قالب بندي پي و شناژهاي ساختمان قالب بندي ستونها در تمام طبقات وقالب بندي تير هاي طبقات با قالبهاي چوبي از تخته نراد خارجي صورت پذيرفت .مراتب جهت تاييد وامضا به استحضار کارفرماي محترم دانشگاه گيلان مي رسد .

امضا ومهر کارفرما                                                                                                                                                                            امضا : مهندسين مشاور آمايش

  

بخش پنجم -  کارهاي فولادي با ميله گرد 

بسمه تعالي 
تاريخ :     
شماره :     
صورتجلسه کارگاهي

      با توجه به آزمايشهاي انجام شده با مراجعه به جدول استاندارد هاي کارخانه  وزن ميله گرد هاي مورد استفاده در پروژه ي جاري جهت برآورد هزينه ي انجام کار از جدولي که در پيوست مي آيد محاسبه مي گردد . مراتب جهت اطلاع وتاييد به استحضار کارفرماي محترم دانشگاه گيلان ميرسد .

امضا : مهندسين مشاور آمايش                                                                                                                                                                        امضا ومهر کارفرما  

                                                                         
                                                                                                                                   پيوست 1-  جدول ميلگرد ها                                  

قطر
Mm	سطح مقطع
(ميلي متر مربع)	وزن واحد طول
Kg/m	
6	28.3	.222	
8	50.3	.395	
10	78.5	.617	
12	113	.888	
14	154	1.21	
16	201	1.58	
18	255	2	
20	314	2.47	
22	380	2.98	
24	452	3.55	
25	491	3.85	
26	531	4.17	
28	616	4.83	
30	707	5.55	
32	804	6.31	
34	908	7.12	
36	1017	7.98	

شرح عمليات :
تهيه  بريدن و خم کردن ميله گرد هاي آجدار از نوع  به قطر تا 10 ميليمتر براي بتن مسلح با سيم پيچي لازم .
شماره فهرست بها :  070201

 ??F آرماتورهاي آجدار 8

	واحد : کيلو گرم		
ملاحظات	کلي	جزئي	تعداد	وزن
هر مورد
kg	طول
هر مورد
m	تعداد قسمت هاي مشابه	شرح عمليات	رديف	
	109.5	109.5	41	2.67	6.8	1	خاموت هاي 
عرضي 
8F
در پي به عرض 180 cm	1	
	90.2	45.1	
22
	
2.05
	5.2	2	خاموت هاي 
عرضي 
8F
در پي به عرض 120 cm	
2
	
	82	82	40	2.05	5.2	1	خاموت هاي عرضي
8F
در پي به عرض 120 cm	3	
	81.2	81.2	40	2.3	5.8	1	خاموت هاي عرضي
8F
در پي به عرض 140 cm
در آکس	
4
	
	48	12	15	.8	2	4	خاموت هاي عرضي
8F
در پي به عرض 60  cm	
5
	
	81.6	40.8	22	1.86	4.7	2	خاموت هاي عرضي
8F
در پي به عرض 100 cm	6	

ستون ها وتير ها

	واحد : کيلو گرم		
ملاحظات	کلي	جزئي	تعداد	وزن
هر مورد
kg	طول
هر مورد
m	تعداد قسمت هاي مشابه	شرح عمليات	رديف	
	68.3	5.7	16	.36	.9	12	خاموت هاي عرضي F8
در ستونهاي طبقه چهارم	1
	
از بخش چهارم قالب بندي تيرها صفحه 8	125.14	10.43	
22
	
.474
	1.2	12	تير هاي افقي در رديفهاي
1و2و3 بين محورهاي
BوA
در چهار سقف	2
	
	176.4	14.7	31	.474	1.2	12	تير هاي افقي در رديفهاي
1و2و3 بين محورهاي
BوC
در چهار سقف	3	
	153.6	12.8	27	.474	1.2	12	تير هاي افقي در رديفهاي
1و2و3 بين محورهاي
CوD
در چهار سقف	4
	
	273.6	17.1	36	.474	1.2	16	تير هاي افقي در محور هاي
َA,B,C,D
بين رديفهاي
1و2
در چهار سقف	5

243
	15.2	32	.474	1.2	16	تير هاي افقي در محور هاي
َA,B,C,D
بين رديفهاي
3و2
در چهار سقف	6	
                                                                                                                                 جمع کل : 1533 کيلوگرم          

F آرماتور هاي آجدار 10

	واحد : کيلو گرم		
ملاحظات	کلي	جزئي	تعداد	وزن
هر مورد
kg	طول
هر مورد
m	تعداد قسمت هاي مشابه	شرح عمليات	رديف	
	
180
	
14.95
	
22
	.68	1.1	12	خاموت هاي عرضي F10
در ستونهاي طبقه اول	
1
	
	180	14.95	
22
	
.68
	1.1	12	خاموت هاي عرضي F10
در ستونهاي طبقه دوم	
2
	
	147	12.2	22	.56	.9	
12
	خاموت هاي عرضي F10
در ستونهاي طبقه سوم	
3
	
  کيلوگرم2040 = 1533 + 507 : جمع کل                                                                                                                                   

شرح عمليات :
تهيه بريدن و خم کردن ميله گردهاي آجدار از نوع  به قطر 12 تا 18 ميليمتر براي بتن مسلح با سيم پيچي لازم .
شماره فهرست بها :  070202

		F آرماتور هاي آجدار 14
	در تير هاي طبقات ساختمان شامل چهار طبقه
	واحد : کيلو گرم		
ملاحظات	کلي	جزئي	تعداد	وزن
هر مورد
kg	طول
هر مورد
m	تعداد قسمت هاي مشابه	شرح عمليات	رديف	
نقل از بخش قالب بندي تيرها	72.6	6.04	2	3.02	2.5	12	تير هاي افقي در رديفهاي
1و2و3 بين محور هاي
AوB
در چهار طبقه(B1)	
1
	
	73	6.06	
2
	
3.03
	2.5	12	تير هاي افقي در رديفهاي
1و2و3 بين محور هاي
CوB
در چهار طبقه(B1)	
2
	
	72.6	6.04	2	3.02	2.5	
12
	تير هاي افقي در رديفهاي
1و2و3 بين محور هاي
DوC
در چهار طبقه(B1)	
3
	
	96.8	6.04	2	3.02	2.5	16	تيرهاي افقي در محورهاي A,B,C,D
بين رديفهاي
1و2
در جهار سقف
)B2(	4	
	96.8	6.054	2	3.02	2.5	16	تيرهاي افقي در محورهاي A,B,C,D
بين رديفهاي
3و2
در جهار سقف
)B2(	5	
 412 کيلوگرم:                                                                                                                                  جمع کل 

F آرماتور هاي آجدار 16
در تيرهاي طبقات ساختمان شامل جهار طبقه
	واحد : کيلو گرم		
ملاحظات	کلي	جزئي	تعداد	وزن
هر مورد
kg	طول
هر مورد
m	تعداد قسمت هاي مشابه	شرح عمليات	رديف	
	1168	73	10	7.3	4.6	16	تيرهاي افقي در محورهاي A,B,C,D
بين رديفهاي
1و2
در جهار سقف
)B2(	1	
	1008	63	
10
	
6.3
	4	16	تيرهاي افقي در محورهاي A,B,C,D
بين رديفهاي
3و2
در جهار سقف
)B2(	
2
	
   کيلوگرم2176 :                                                                                                                                   جمع کل

F آرماتور هاي آجدار 18
در تيرهاي طبقات ساختمان شامل جهار طبقه
	واحد : کيلو گرم		
ملاحظات	کلي	جزئي	تعداد	وزن
هر مورد
kg	طول
هر مورد
m	تعداد قسمت هاي مشابه	شرح عمليات	رديف	
نقل از بخش قالب بندي تيرها	
600
	50	
10
	
5
	2.5	12	تير هاي افقي در رديفهاي
1و2و3 بين محور هاي
A, B
در چهار طبقه(B1)	1	
	600	50	
10
	
5
	2.5	12	تير هاي افقي در رديفهاي
1و2و3 بين محور هاي
B, C
در چهار طبقه(B1)	
2
	
	600	50	10	5	2.5	12	تير هاي افقي در رديفهاي
1و2و3 بين محور هاي
C, D
در چهار طبقه(B1)	3	
  کيلوگرم1800                                                                                                                                  جمع کل :

F آرماتور هاي آجدار 14
در ستون ها   
	واحد : کيلو گرم		
ملاحظات	کلي	جزئي	تعداد	وزن
هر مورد
kg	طول
هر مورد
m	تعداد قسمت هاي مشابه	شرح عمليات	رديف	
	118.4	29.6	8	3.7	3.06	4	ستون هاي
C2
در طبقه ي چهارم	
1
	
	313.6	39.2	
8
	
4.9
	4.06	8	ستون هاي
C3
در طبقات سوم و چهارم	2	
  کيلوگرم432                                                                                                                                  جمع کل : 

F آرماتور هاي آجدار 16
 در ستون ها    
	واحد : کيلو گرم		
ملاحظات	کلي	جزئي	تعداد	وزن
هر مورد
kg	طول
هر مورد
m	تعداد قسمت هاي مشابه	شرح عمليات	رديف	
	154.9	38.72	8	4.84	3.06	4	ستون هاي
C1
در طبقه ي چهارم	1	
	205.3	51.3	
8
	
6.42
	4.06	4	ستون هاي
C2
در طبقات سوم	
2
	
	411	51.3	8	6.42	4.06	8	ستون هاي
C3
در طبقات اول و دوم	3	
  کيلوگرم771.2                                                                                                                                   جمع کل : 

F آرماتور هاي آجدار 18
در ستون ها
	واحد : کيلو گرم		
ملاحظات	کلي	جزئي	تعداد	وزن
هر مورد
kg	طول
هر مورد
m	تعداد قسمت هاي مشابه	شرح عمليات	رديف	
	260	65	8	8.12	4.06	4	ستون هاي
C1
در طبقه ي سوم	
1
	
	520	65	
8
	
8.12
	4.06	8	ستون هاي
C2
در طبقات اول و دوم	
2
	
  کيلوگرم780جمع کل :                                                                                                                                   

F آرماتور هاي آجدار 16
در پي
	واحد : کيلو گرم		
ملاحظات	کلي	جزئي	تعداد	وزن
هر مورد
kg	طول
هر مورد
m	تعداد قسمت هاي مشابه	شرح عمليات	رديف	
	
228.2
	228.2	14	16.3	10.3	1	آرماتور هاي طوليF16
در پي به عرض
180 cm	
1
	
	227	227	
14
	
16
	10.05	1	آرماتور هاي طوليF16
در پي به عرض
120 cm	
2
	
	204.4	102.2	14	7.3	4.6	2	آرماتور هاي طوليF16
در پي به عرض
120 cm	
3
	
	232.3	232.3	14	16.6	10.5	1	آرماتور هاي طوليF16
در پي به عرض
140 cm
در آکس 2	4	
	353	88.2	14	6.3	4	4	آرماتور هاي طوليF16
در پي به عرض
60cm	
5
	
	204.4	102.2	14	7.3	4.6	2	آرماتور هاي طوليF16
در پي به عرض
100cm	6	
  کيلوگرم1450 جمع کل :                                                                                                                                   
 کيلوگرم7821.2 :جمع کل آيتم 

شرح عمليات :
تهيه بريدن و خم کردن ميله گردها آجدار از نوع به قطر 20 ميليمتر وبيشتر براي بتن مسلح با سيم پيچي لازم 
شماره فهرست بها : 070203

F آرماتور هاي آجدار 20
در ستون ها
	واحد : کيلو گرم		
ملاحظات	کلي	جزئي	تعداد	وزن
هر مورد
kg	طول
هر مورد
m	تعداد قسمت هاي مشابه	شرح عمليات	رديف	
	658.4	80.23	8	10.03	4.06	4	ستون هاي
C1
در طبقات اول و دوم	1	
 کيلو گرم658.4                                                                                                                                   جمع کل :

بخش ششم -  بتن درجا

شرح عمليات :
تهيه واجراي بتن با شن ماسه ي شسته طبيعي يا شکسته با 350 کيلو گرم سيمان در متر مکعب .
شماره فهرست بها : 080106

بتن ريزي فونداسيون 
	واحد :متر مکعب		
ملاحظات	کلي	جزئي	حجم	مساحت
	طول
هر مورد
m	تعداد قسمت هاي مشابه	شرح عمليات	رديف	
	49.9	-	49.9	99.8	.5
(ارتفاع)	

1

	مساحت کل پي	
1
	
	16.81	-	
16.81
	
33.6
	.5
(ارتفاع)	1	احجام قسمتهاي خالي کسر
مي شود	
2
	
                               متر 33.1                                                                                                                                    حجم کل بتون ريزي در پي :

 

بتن ريزي ستونها
	واحد :متر مکعب		
ملاحظات	کلي	جزئي	حجم	مساحت
	طول
هر مورد
m	تعداد قسمت هاي مشابه	شرح عمليات	رديف	
	9	-	.375	.1225	3.06
(ارتفاع)	
24
	ستونهاي طبقات اول و دوم
( هم حجم )	

1

	6.6	-	
.275
	
.09
	3.06
(ارتفاع)	24	ستونهاي طبقات سوم و چهارم
( هم حجم )	2	
 متر مکعب  15.6  :                                                                                                                                   حجم کل بتون ريزي در پي

بتن ريزي تير ها 
	واحد :متر مکعب		
ملاحظات	کلي	جزئي	حجم	مساحت
	طول
هر مورد
m	تعداد قسمت هاي مشابه	شرح عمليات	رديف	
نقل از بخش 1	7.73	-	.483	.105	4.6	
16
	تير هاي افقي در محور هاي
A,B,C,D
بين رديفهاي
1و2
در چهار سقف
)B2)	1	
	6.72	-	
.42
	
.105
	4	16	تير هاي افقي در محور هاي
A,B,C,D
بين رديفهاي
و23
در چهار سقف
)B2)	2	
نقل از بخش قالب بندي تيرها	3.24	-	.27	.105	2.57	12	تيرهاي افقي در رديفهاي
1و2و3
بين محورهاي
B,A
در چهار سقف
)B1)	1	
	4.812	-	.401	.105	3.82	12	تيرهاي افقي در رديفهاي
1و2و3
بين محورهاي
B,C
در چهار سقف
)B1)	2	
	4.2	-	.35	.105	3.32	12	تيرهاي افقي در رديفهاي
1و2و3
بين محورهاي
D,C
در چهار سقف
)B1)	3	
 متر مکعب26.7                                                                                                                                   جمع کل : 

 متر مکعب 75.4 جمع کل آيتم :

شرح عمليات :
تهيه و اجراي بتن با شن و ماسه ي شسته ي طبيعي با 100 کيلو گرم سيمان در متر مکعب بتن .
شماره فهرست بها : 080101

بتن مگر در کف پي
	واحد :متر مکعب		
ملاحظات	کلي	جزئي	حجم	مساحت
	طول
هر مورد
m	تعداد قسمت هاي مشابه	شرح عمليات	رديف	
	.768	.192	.1	.8	2.4	
4
	محور هاي
A,B,C,D
بين پي ها ي عرضي در پائين	1	
	.742	.371	
.1
	
1.4
	2.65	2	محور هاي
A,D
بين پي ها ي عرضي دربالا	2	
	.636	.318	.1	1.2	2.65	2	محور هاي
B,C
بين پي ها ي عرضي دربالا	3	
	1.326	1.326	.1	1.3	10.2	1	محور 1	4	
	1.87	1.836	.1	1.8	10.4	1	محور 2	5	
	1.61	1.53	.1	1.5	10.75	1	محور 3	6	
 متر مکعب6/76                                                                                                                                  جمع کل :

بخش هفتم- کارهاي فولادي سنگين ( راه پله )

شرح عمليات :
تهيه ساخت و نصب تير آهن يا ناوداني با تمام عمليات برش کاري جوشکاري و اتصال هاي مربوط همراه با وصله هاي لازم براي اتصال به عضو ديگر .
شماره فهرست بها : 090206

	واحد : کيلو گرم		
ملاحظات	کلي	جزئي	تعداد	وزن
هر مورد
kg	طول
هر مورد
m	تعداد قسمت هاي مشابه	شرح عمليات	رديف	
	387	64.5	2	32.25	2.5	6	تير آهنهاي عرضي در راه پله
(IPE 14)	1	
	1548	258	4	64.5	5	6	تير آهنهاي طولي در راه پله (شمشيري)
)IPE 14)	2	
 کيلو گرم1935                                                                                                                                  جمع کل :

بسمه تعالي 
تاريخ :      
شماره :      
صورت جلسه کارگاهي

در تاريخ 8 شهريور ماه 1380 تعداد 4 لنگه (دو عدد) در فولادي به وزن کلي 372 کيلو گرم وارد کارگاه شده جهت بر آورد وساير عمليات مورد استفادهقرار مي گيرد . بدينوسيله تحويل مصالح فوق مورد تاييد مهندسين مشاور آمايش قرار گرفته و به استحضار کارفرماي محترم دانشگاه گيلان مي رسد .

جمع کل :  کيلو گرم  230= 1935+372 (آهن آلات مصرفي)

امضا و مهر کارفرما                                                                                                                                                                          امضا : مهندسين مشاور آمايش                    

بخش هشتم -  سقفهاي سبک بتني

شرح عمليات :
اجراي سقف بتني به ضخامت 30 سانتيمتر تيرچه و بلوک تو خالي بتني شامل تهيه ي تمام مصالح به استثناي ميله گرد و همچنين تهيه ي تجهيزات لازم به طور کامل .
شماره فهرست بها : 100103

	واحد : متر مربع		
ملاحظات	کلي	جزئي	مساحت	عرض
هر مورد
m	طول
هر مورد
m	تعداد قسمت هاي مشابه	شرح عمليات	رديف	
	243	-	81	9.5	8.5	
3
	سقف طبقات دوم و سوم
(با کسر سطح تيرها)	1	
	23.75	-	
11.25
	
4.5
	2.5	3	مساحت راه پله کسر مي شود	2	
	81	-	81	8.5	9.5	1	سقف طبقه ي چهارم	3	
                                                                                                                                  جمع کل : 290 متر مربع 

بخش نهم- آجرکاري و شفته ريزي

شرح عمليات :
آجر کاري با آجر فشاري به ضخامت 1/5 آجر و بيشتر و ملات ماسه سيمان  1:6 .
شماره فهرست بها : 110201

ديوارهاي خارجي
 
	واحد :متر مکعب		
ملاحظات	کلي	جزئي	حجم	عرض
مورد
m	طول
مورد
m	تعداد قسمت هاي مشابه	شرح عمليات	رديف	
ارتفاع ديوار
2.6متر (تاسقف)	5.6	-	5.6	.22	9.8	
1
	ديوار هاي آجري  پارکينگ
(ضلع شرقي)	
1
	
ارتفاع ديوار
2.6متر (تاسقف)	5.2	-	
5.2
	
.22
	9.7	1	ديوار هاي آجري  پارکينگ
(ضلع شمالي)	
2
	
	-2.8	1.4	1.4	.22	2.5	2	درهاي ضلع شمالي کسر
مي شود	
3
	
ارتفاع ديوار
2.6متر (تاسقف)	5.6	-	5.6	.22	9.8	1	ديوارهاي آجري پارکينگ
(ضلع غربي)	
4
	
ارتفاع ديوار
2.6متر (تاسقف)	1.43	-	1.43	.22	2.5	1	ديوارهاي آجري پارکينگ
(ضلع جنوبي)	
5
	
ارتفاع ديوار
3متر (تاسقف)	5.4	1.8	1.8	.22	2.7	3	ديوارهاي خارجي طبقات خواب شمالي
ضلع شرقي	
6
	
ارتفاع ديوار
3متر (تاسقف)	6.6	2.2	2.2	.22	3.3	3	ديوارهاي خارجي طبقات خواب شرقي
ضلع جنوبي	
7
	
ارتفاع ديوار
3متر (تاسقف)	6.72	2.24	2.24	.22	3.4	3	ديوارهاي خارجي طبقات خواب مرکزي
ضلع جنوبي	8	
ارتفاع ديوار
3متر (تاسقف)	5.7	1.9	1.9	.22	2.9	3	ديوارهاي خارجي طبقات خواب غربي ضلع غربي	
9
	
ارتفاع ديوار
3متر (تاسقف)	6.6	2.2	2.2	.22	3.3	3	ديوارهاي خارجي طبقات خواب غربي ضلع جنوبي	10	
ارتفاع ديوار
3متر (تاسقف)	2.7	.92	.92	.22	1.4	3	ديوار هاي خارجي طبقات حمام	11	
ارتفاع ديوار
3متر (تاسقف)	2.7	.92	.92	.22	1.4	3	ديوار هاي خارجي طبقات دستشويي	12	
ارتفاع ديوار
3متر (تاسقف)	9.9	3.3	3.3	.22	5	3	ديوار هاي خارجي طبقات هال
ضلع شرقي	13	
ارتفاع ديوار
3متر (تاسقف)	5.7	2.9	2.9	.22	4.4	3	ديوار هاي خارجي طبقات هال
ضلع شمالي	14	
ارتفاع ديوار
3متر (تاسقف)	5.7	1.9	1.9	.22	2.9	3	ديوار هاي خارجي طبقات
آشپزخانه
ضلع شمالي	15	
ارتفاع ديوار
3متر (تاسقف)	5.6	1.85	1.85	.22	2.8	3	ديوار هاي خارجي طبقات
راهرو
ضلع شمالي	16	
ارتفاع ديوار
3متر (تاسقف)	9.6	3.2	3.2	.22	4.9	3	ديوار هاي خارجي طبقات
راهرو
ضلع غربي	17	
کنترل : محيط مجموع = 4/38
  متر38/1 محيط کل ساختمان تقريبا برابر

	واحد :متر مکعب		
ملاحظات	کلي	جزئي	حجم	عرض
مورد
m	طول
هر مورد
m	تعداد قسمت هاي مشابه	شرح عمليات	رديف	
ارتفاع 1.5
متر	-8	-	.5	.22	1.5	
16
	پنجره تيپ 1
که کسر
مي شوند
1.5(عرض
متر )
	1	
ارتفاع 1.5
متر	-2	-	
.66
	
.22
	2	3	پنجره تيپ 2
که کسر
مي شوند
2(عرض
متر )
	2	
                                                                                                                                  جمع کل : 79 متر مکعب         

شرح عمليات :
ديوار يک آجره با آجر فشاري و ملات ماسه- سيمان 1:6
شماره فهرست بها : 110205

ديوار هاي داخلي

	واحد : متر مربع		
ملاحظات	کلي	جزئي	مساحت	عرض
هر مورد
m	طول
هر مورد
m	تعداد قسمت هاي مشابه	شرح عمليات	رديف	
ارتفاع سقف
2.6 m	23.4	-	7.8	-	3	
3
	پارکينگ
( ديوار هاي انبار ها )	1	
ارتفاع سقف
3 m	18.9	-	
6.3
	
-
	2.1	3	ديوار هاي داخلي طبقات
(خواب شرقي ديوار شمالي)
	2	
ارتفاع سقف
3 m	27.9	-	9.3	-	3.1	3	ديوار هاي داخلي طبقات
(خواب شرقي ديوار غربي)
	3	
ارتفاع سقف
3 m	23.4	-	7.8	-	2.6	3	ديوار هاي داخلي طبقات
(خواب مرکزي ديوار شمالي)
	4	
ارتفاع سقف
3 m	22.5	-	7.5	-	2.5	3	ديوار هاي داخلي طبقات
(خواب مرکزي ديوار غربي)
	5	
ارتفاع سقف
3 m	18	-	6	-	2	3	ديوار هاي داخلي طبقات
(خواب غربي ديوار شمالي)
	6	
ارتفاع سقف
3 m	10.8	-	3.6	-	1.2	3	ديوار هاي داخلي طبقات
(حمام
ديوار شرقي)
	7	
ارتفاع پنجره
.5 m	-.75	-	.25	-	.5	3	ديوار هاي داخلي طبقات
(پنجره ي حمام کسر شود)
	8	
ديوار
سراسري شمالي
ارتفاع سقف
3 m	27.9	-	9.3	-	3.1	3	ديوار هاي داخلي طبقات
(حمام
ديوار شمالي)
	9	
ارتفاع سقف
3 m	3.6	-	1.2	-	.4	3	ديوار هاي داخلي طبقات
(حمام
ديوار غربي)
	10	
ارتفاع سقف
3 m	12.6	-	4.2	-	1.4	3	ديوار هاي داخلي طبقات
(دستشويي
ديوار شمالي)
	11	
ارتفاع سقف
3 m	6.3	-	2.1	-	.7	3	ديوار هاي داخلي طبقات
(دستشويي
ديوار شرقي)
	12	
ارتفاع سقف
3 m	5.4	-	1.8	-	.6	3	ديوار هاي داخلي طبقات
(دستشويي
ديوار جنوبي)
	13	
ارتفاع سقف
3 m	4.5	-	1.5	-	.5	3	ديوار هاي داخلي طبقات
(دستشويي
پنجره غربي)
	14	
ارتفاع پنجره
.5 m	-.75	-	.25	-	.5	3	ديوار هاي داخلي طبقات
(دستشويي
پنجره غربي
کسر مي شود)
	15	
ديوار سراسري داخلي ارتفاع تا سقف
3 m	46.8	-	15.6	-	5.2	3	ديوار هاي داخلي طبقات
(آشپز خانه)
	16	
ديوار سراسري داخلي ارتفاع تا سقف
1.8 m	-17.3	-	5.8	-	3.2	3	ديوار هاي داخلي طبقات
(آشپز خانه بار کسر مي شود)
	17	
 متر مربع232.                                                                                                                                  جمع کل : 

بخش دهم- عايق کاري رطوبتي

اين فصل بر مبناي جزئيات داده شده در نقشه ها برآورد مي شود .

شرح عمليات :
عايقکاري رطوبتي با دو قشر اندود قير و يک لا گوني براي سطوح حمامها و توالتها و روي پي ها .
شماره فهرست بها : 130102

	واحد : متر مربع		
ملاحظات	کلي	جزئي	مساحت	عرض
هر مورد
m	طول
هر مورد
m	تعداد قسمت هاي مشابه	شرح عمليات	رديف	
	6.33	-	2.11	1.41	1.5	
3
	کف توالت	
1
	
	-.03	-	
.3
	
.59
	.5	3	داکت دستشويي کسر مي شود
	2	
	6.3	-	2.1	1.4	1.5	3	کف توالت
	3	
	6.3	-	2.1	.7	3	3	ديوار شرقي توالت	4	
	1.26	-	4.2	1.4	3	3	ديوار شمالي توالت	5	
	9	-	3	3	1	3	ديوار غربي توالت	6	
	17.1	-	5.7	1.9	3	3	ديوار جنوبي توالت	7	
	-.75	-	.25	.5	.5	3	پنجره داکت کسر مي شود	8	
	6	-	2	1.7	1.2	3	کف حمام	9	
	10.8	-	3.6	1.2	3	3	ديوار شرقي حمام	10	
	-.75	-	.25	.5	.5	3	پنجره داکت کسر مي شود	11	
	15.3	-	5.1	1.7	3	3	ديوار شمالي حمام	12	
	15.3	-	5.1	1.7	3	3	ديوار جنوبي حمام	13	
	4.5	-	1.5	.5	3	3	ديوار غربي حمام	14	
 متر مربع107.73                                                                                                                                  جمع کل :

شرح عمليات :
 عايقکاري رطوبتي با دو قشر اندود قير يک لايه گوني براي ساير سطوح .
شماره فهرست بها : 130103

	واحد : متر مربع		
ملاحظات	کلي	جزئي	مساحت	عرض
هر مورد
m	طول
هر مورد
m	تعداد قسمت هاي مشابه	شرح عمليات	رديف	
	28.5	-	9.5	2.7	3.5	
3
	کف آشپزخانه	1	
 متر مربع28/5                                                                                                                                  جمع کل :

بخش يازدهم- کارهاي آلومينيومي

بسمه تعالي
تاريخ :       
شماره :       
صورت جلسه کارگاهي

در تاريخ 6 شهريور ماه 1380 تعداد 16 قطعه پنجره ي آلومينيمي تيپ 1 به وزن 19 کيلو گرم  تعداد 3 قطعه پنجره تيپ 2 به وزن 6/24 کيلو گرم و تعداد 6 قطعه پنجره تيپ 3 به وزن تقريبي هر قطعه 3 کيلو گرم وارد کارگاه شده جهت بر آورد و ساير عمليات مورد استفاده قرار مي گيرد . بدينوسيله تحويل مصالح فوق مورد تاييد مهندسين  مشاور آمايش قرار مي گيرد و به استحضار کارفرماي محترم دانشگاه گيلان مي رسد .

امضا و مهر کارفرما                                                                                                                                                                         امضا : مهندسين مشاور آمايش

شرح عمليات :
تهيه ساخت و نصب در پنجره ي آلومينيومي که در آن از ميله گرد آهني استفاده شده است .
شماره فهرست بها : 170101

	واحد : کيلو گرم		
ملاحظات	کلي	جزئي	وزن

kg	عرض
هر مورد
m	طول
هر مورد
m	تعداد قسمت هاي مشابه	شرح عمليات	رديف	
	304	19	19	1.5	1.5	16	پنجره ي تيپ 1
	1	
	73.8	24.6	24.6	1.5	2	3	پنجره ي تيپ 2
	2	
	18	3	3	.5	.5	6	پنجره ي تيپ 3
	3	
                                                                                                                                 جمع کل : 396  کيلو گرم

بخش دوازدهم- اندودکاري

شرح عمليات :
اندود گچ وخاک به ضخامت حدود 5/2 سانتيمتر روي سطوح قائم .
شماره فهرست بها : 180202

	واحد : متر مربع		
ملاحظات	کلي	جزئي	سطح	عرض
هر مورد
m	طول
هر مورد
m	تعداد قسمت هاي مشابه	شرح عمليات	رديف	
	22.1	-	22.1	2.6	8.5	
1
	پارکينگ
ديوار شرقي	1	
	5.2	-	
5.2
	
2.6
	2	1	پارکينگ
ديوار شمالي	2	
	10.4	-	10.4	2.6	4	1	پارکينگ
ديوار راه پله	3	
	45.5	-	6.5	2.6	2.5	7	پارکينگ ديوار داخلي انبارها
(شمالي و جنوبي)	4	
	3.9	-	1.3	2.6	.5	3	پارکينگ ديوار داخلي انبارها
(شرقي)	5	
	10.2	-	3.4	2.6	1.3	3	پارکينگ ديوار داخلي انبارها
(غربي)	6	
	5.4	-	1.8	2.6	.7	3	پارکينگ ديوار خارجي انبارها
	7	
	22.5	-	7.5	3	2.5	3	خواب شرقي
ديوار شرقي
(داخلي)	8	
	27.9	-	9.3	3	3.1	3	خواب شرقي
ديوار جنوبي
(داخلي)	9	
	-6.75	-	2.25	1.5	1.5	3	خواب شرقي پنجره ي جنوبي کسرمي شود	10	
	27.9	-	9.3	3	3.1	3	خواب شرقي
ديوار غربي
(داخلي)	11	
	21.6	-	7.2	3	2.4	3	خواب شرقي
ديوار شمالي
(داخلي)	12	
	22.5	-	7.5	3	2.5	3	خواب مرکزي
ديوار غربي
(داخلي)	13	
	27.9	-	9.3	3	3.1	3	خواب مرکزي
ديوار جنوبي
(داخلي)	14	
	-6.75	-	2.25	1.5	1.5	3	خواب مرکزي
پنجره ي جنوبي کسر شود	15	
	27.9	-	9.3	3	3.1	3	خواب مرکزي
ديوار شرقي
(داخلي)	16	
	26.1	-	8.7	3	2.9	3	خواب مرکزي
ديوار شمالي
(داخلي)	17	
	22.5	-	7.5	3	2.5	3	خواب غربي
ديوار شرقي
(داخلي)	18	
	27.9	-	9.3	3	3.1	3	خواب غربي
ديوار غربي
(داخلي)	19	
	26.1	-	8.7	3	2.9	3	خواب غربي
ديوار جنوبي
(داخلي)	20	
	-6.75		2.25	1.5	1.5	3	خواب غربي
پنجره ي جنوبي کسر مي شود	21	
	19.8	-	6.6	3	2.2	3	خواب غربي
ديوار شمالي
(داخلي)	22	
	19.8	-	6.6	3	2.2	3	خواب غربي
ديوار شمالي
(داخلي)	23	
	26.1	-	8.7	3	2.9	3	خواب مرکزي
ديوار شمالي
(داخلي)	24	
	14.4	-	4.8	3	1.6	3	خواب غربي
ديوار شمالي
(خارجي)
هال	25	
	28.8	-	9.6	3	3.2	3	ديوار جنوبي پذيرايي	26	
	42.3	-	14.1	3	4.7	3	ديوار شرقي پذيرايي	27	
	31.5	-	10.5	3	3.5	3	ديوار غربي پذيرايي	28	
	31.5	-	10.5	3	3.5	3	ديوار شرقي
آشپزخانه	28	
	40.5	-	13.5	3	4.5	3	ديوار غربي
آشپزخانه	29	
	24.75	-	8.25	3	2.75	3	ديوار شمالي
آشپزخانه	30	
	15.3	-	5.1	3	1.7	3	ديوار جنوبي
آشپزخانه	31	
	-6.75	-	2.25	1.5	1.5	3	آشپزخانه
پنجره ي شمالي کسرمي شود	32	
	-9	-	3	1.5	2	3	آشپزخانه
پنجره ي شمالي کسرمي شود	33	
	-34.4	-	5.75	1.8	3.2	6	آشپزخانه
قسمت بار کسر مي شود
(دو طرفه)	34	
	28.8	-	7.2	3	2.4	4	راه پله
ديوار شمالي
	35	
	88	-	13.5	3	4.5	8	راه پله
ديوار شرقي و غربي
	36	
	-9	-	2.25	1.5	1.5	4	راه پله
پنجره شمالي کسر مي شود	37	
	16.8	-	4.2	3	1.4	4	راه پله
ديوار جنوبي	38	
	37.8	-	12.6	3	4.2	3	ديوار شمالي پذيرايي	39	
	6	-	3	1.5	2	3	پنجره ي پذيرايي کسر مي شود	40	
                                                                                                                                  جمع کل : 765 متر مربع                                

شرح عمليات :
اندود گچ و خاک به ضخامت حدود 5/2 سانتيمتر بر روي سقفها .
شماره فهرست بها : 180203
	واحد : متر مربع		
ملاحظات	کلي	جزئي	سطح	عرض
هر مورد
m	طول
هر مورد
m	تعداد قسمت هاي مشابه	شرح عمليات	رديف	
سقفها به طور کلي حساب شده اند	392.4	-	98.1	-	-	
4
	سقف طبقات	1	
	34.5	-	
11.5
	
4.6
	2.5	3	سقف راه پله در سه طبقه کسر مي شود	2	
	6	-	2	1.2	1.7	3	حمام کسر مي شود	3	
	6.3	-	2.1	1.4	1.5	3	دستشويي کسر مي شود	4	
                                                                                                                                  جمع کل : 346 متر مربع                        

شرح عمليات :
سفيد کاري روي سطوح قائم که در آن ابزار گچي ساده ( چفت ) به کار رفته و پرداخت آن با گچ کشته باشد .

شماره فهرست بها : 180204
نقل از بخش اندود کاري با گچ و خاک- صفحه 51
جمع کل : 765 متر مربع

شرح عمليات :
سفيد کاري زير سقفها که در آن از ابزار گچي ساده ( چفت ) به کار رفته و پرداخت آن با گچ کشته باشد .
شماره فهرست بها : 180205
نقل از بخش اندود کاري سقفها با گچ و خاک- صفحه 52
جمع کل : 358 متر مربع

شرح عمليات :
اندود سيماني به ضخامت حدود 1 سانتيمتر بر روي سطوح قائم با ملات ماسه سيمان 1:4
شماره فهرست بها : 180303
	واحد : متر مربع		
ملاحظات	کلي	جزئي	سطح	عرض
هر مورد
m	طول
هر مورد
m	تعداد قسمت هاي مشابه	شرح عمليات	رديف	
نقل محيط تقريبي از بخش آجر چيني	
41.4
	-	13.8	3	4.6	
3

حمام

	1	
نقل محيط تقريبي از بخش آجر چيني	33.3	-	
11.1
	
3
	3.7	3	دستشويي	2	
                                                                                                                                  جمع کل : 7/74 متر مربع

شرح عمليات :
اندود سيماني به ضخامت حدود 2 سانتيمتر بر روي سطوح افقي با ملات ماسه سيمان 1:4 .
شماره فهرست بها : 180308
	واحد : متر مربع		
ملاحظات	کلي	جزئي	سطح	عرض
هر مورد
m	طول
هر مورد
m	تعداد قسمت هاي مشابه	شرح عمليات	رديف	
	
6
	-	2	1.2	1.7	
3
	
حمام
	1	
	6.3	-	
2.1
	
1.4
	1.5	3	دستشويي	2	
                                                                                                                                  جمع کل : 3/12 متر مربع                                                        

بخش سيزدهم- کارهاي چوبي

شرح عمليات :
تهيه نصب چهار چوب از چوب داخلي به ابعاد اسمي 6*12 سانتيمتر يا مقطع معادل آن با تمام مشتيهاي پيش بيني شده و زهوار لازم براي کتيبه .
شماره فهرست بها : 190103
	واحد : متر طول		
ملاحظات	کلي	جزئي	-
	-
	طول
هر مورد
m	تعداد قسمت هاي مشابه	شرح عمليات	رديف	
عرض در
1.20m
و ارتفاع در
2.7m	
23.4
	7.8			7.8	
3
	در هاي تيپ يک
( ورودي آپارتمان )	1	
عرض در
1m
و ارتفاع در
2.7m	66.6	7.4			7.4	9	در هاي تيپ دو
(خوابها)	2	
عرض در
.7m
و ارتفاع در
2.7m	40.8	6.8			6.8	6	درهاي تيپ سه
(حمام و دستشويي)	3	
                                                                                                                                 جمع کل : 8/130 متر                                                                           

شرح عمليات :
تهيه و ساخت کلاف در چوبي به ابعاد 8/3 * 6 سانتيمتر يا مقطع معادل آن با چوب داخلي همراه با دو قيد چوبي به ابعاد 8/3 * 6 يا مقطع معادل آن به طول 20 سانتيمتر براي نصب قفل .
شماره فهرست بها : 190201
	واحد : متر مربع		
ملاحظات	کلي	جزئي	-
	عرض
هر مورد
m	ارتفاع
هر مورد
m	تعداد قسمت هاي مشابه	شرح عمليات	رديف	
عرض در
1.20m
و ارتفاع در
2.7m	
9.72
	3.24	-	1.2	2.7	
3
	در هاي تيپ يک
( ورودي آپارتمان )	1	
عرض در
1m
و ارتفاع در
2.7m	18.9	2.1	-	1	2.1	9	در هاي تيپ دو
(خوابها)	2	
عرض در
.7m
و ارتفاع در
2.7m	8.82	1.47	-	.7	2.1	6	درهاي تيپ سه
(حمام و دستشويي)	3	
                                                                                                                                  جمع کل : 44/37 متر مربع            

شرح عمليات : 
تهيه و نصب پوشش دو روي در با تخته ي سه لايي داخلي به ضخامت 4 ميليمتر با پرس کردن .
شماره ي فهرست بها : 190401
نقل از آيتم 190201 تهيه و نصب کلاف در چوبي .
جمع کل : 44/37 متر مربع 

شرح علميات : 
تهيه ساخت و نصب چهار چوب کمد و گنجه از چوب نراد خارجي به ابعاد اسمي 7*5 سانتيمتر يا مقطع معادل آنها با تمام مشتيهاي پيش بيني شده .
شماره فهرست بها : 190701
	واحد : متر طول		
ملاحظات	کلي	جزئي	-
	-
	طول
هر مورد
m	تعداد قسمت هاي مشابه	شرح عمليات	رديف	

1.2*2.6
	
45.6
	7.6			7.6	
6
	درهاي  کمد	1	
                                                                                                                                  جمع کل : 6/45 متر

شرح عمليات : 
تهيه ساخت در کمد و گنجه از نئوپان به ضخامت 18 ميليمتر و نصب زهوار چوبي در محيط آن به ابعاد  2*8/1 سانتيمتر .
شماره فهرست بها : 190702
	واحد : متر طول		
ملاحظات	کلي	جزئي	-
	-
	طول
هر مورد
m	تعداد قسمت هاي مشابه	شرح عمليات	رديف	

1.2*2.6
	
4.32
	.72			.72	

6

	در هاي کمد	1	
                                                                                                                                  جمع کل : 32/4 متر مربع                 

شرح عمليات :
تهيه و نصب خرپاي چوبي با چهار تراش از چوب داخلي شامل کش ولنگ (کلافهاي تحتاني و فوقاني خرپا) لاپه ( پرلين ) شاخه  توحلقي  رکاب و کلاف روي ديوار  چوب دار و ساير اعضاي مشابه به استثناي تخته کوبيها بر حسب حجم چوب نصب شده .
شماره فهرست بها : 191301
 
	واحد : متر مکعب		
ملاحظات	کلي	جزئي	حجم
	مساحت
	طول
هر مورد
m	تعداد قسمت هاي مشابه	شرح عمليات	رديف	
سطح مقطع مربعي	
.4
	.036	.036	
.0065
	5.5	
11
	چوبهاي قائم	1	
سطح مقطع مربعي	.56	.0507	.0507	
.0065
	7.8	11	چوبهاي مايل داخلي	2	
سطح مقطع مربعي	.7	.065	.065	
.0065
	10	11	چوبهاي فوقاني خرپا	3	
سطح مقطع مربعي	.66	.06	.06	
.0065
	9.5	11	چوبهاي تحتاني خرپا	4	
                                                                                                                                  جمع کل : 32/2 متر مکعب

بخش چهاردهم کاشي و سراميک

شرح عمليات :
کاشي کاري سطوح افقي با کاشي لعابي به ابعاد 15*15 سانتيمتر .
شماره فهرست بها : 200102
	واحد : متر مربع		
ملاحظات	کلي	جزئي	سطح
	عرض
هر مورد
m	طول
هر مورد
m	تعداد قسمت هاي مشابه	شرح عمليات	رديف	
	
6
	-	2	1.2	1.7	
3
	کف حمام	1	
	6.3	-	2	2.1	1.5	3	کف دستشويي	2	
	-.9	-	.3	.6	.5	3	داکت کسر
مي شود	3	
                                                                                                                                  جمع کل : 4/11 متر مربع                                        

شرح عمليات :
کاشي کاري سطوح قائم با کاشي لعابي به ابعاد 15*15 سانتيمتر .
شماره فهرست بها : 200202
	واحد : متر مربع		
ملاحظات	کلي	جزئي	سطح
	عرض
هر مورد
m	طول
هر مورد
m	تعداد قسمت هاي مشابه	شرح عمليات	رديف	
ارتفاع کاشي کاري
2m	
16.2
	-	5.4	-	2.7	
3
	ديوار شمالي آشپزخانه	1	
ارتفاع کاشي کاري
2m	18	-	6	-	3	3	ديوار غربي آشپزخانه	2	
ارتفاع کاشي کاري
2m	7.2	-	2.4	-	1.2	3	ديوار شرقي آشپزخانه	3	
ارتفاع کاشي
1.2m	8.4	-	2.8	-	2.3	3	ديوار شرقي آشپزخانه
(زير بار)	4	
ارتفاع کاشي
1.2m	5.4	-	1.8	-	1.5	3	ديوار جنوبي آشپزخانه
(بار)	5	
ارتفاع کاشي کاري از کف
3m	30.6	-	5.1	-	1.7	6	ديوار شمالي و جنوبي
حمام	6	
ارتفاع کاشي کاري از کف
3m	10.8	-	3.6	-	1.2	3	ديوار شرقي حمام	7	
	-.75	-	.25	.5	.5	3	پنجره ديوار شرقي حمام کسر مي شود	8	
ارتفاع کاشي کاري از کف
3m	5.4	-	1.8	-	.6	3	ديوار غربي حمام	9	
ارتفاع کاشي کاري از کف
3m	12.6	-	4.2	-	1.4	3	ديوار شمالي دستشويي	10	
ارتفاع کاشي کاري از کف
3m	9	-	3	-	1	3	ديوار غربي دستشويي	11	
ارتفاع کاشي کاري از کف
3m	6.3	-	2.1	-	.7	3	ديوار شرقي  دستشويي
	12	
ارتفاع کاشي کاري از کف
3m	13.5	-	4.5	-	1.5	3	ديوار جنوبي دستشويي	13	
                                                                                                                                   جمع کل : 7/142 متر مربع

شرح عمليات :
تهيه و نصب کاشي کفي (سراميک) به ابعاد 20*20 سانتيمتر .
شماره فهرست بها : 200706

	واحد : متر مربع		
ملاحظات	کلي	جزئي	سطح
	عرض
هر مورد
m	طول
هر مورد
m	تعداد قسمت هاي مشابه	شرح عمليات	رديف	
	
59.4
	-	19.8	4.7	4.2	
3
	هال	1	
	28.5	-	9.5	2.7	3.5	3	آشپزخانه	2	
	8.6	-	4.2	1.2	3.5	3	راهرو وهال خصوصي
(شمالي)	3	
	21.6	-	7.2	6	1.2	3	راهرو وهال خصوصي
(جنوبي)	4	
	23.4	-	7.8	2.5	3.1	3	خواب شرقي
	5	
	22.5	-	7.5	3	2.5	3	خواب مرکزي
	6	
	21.8	-	7.25	2.5	2.9	3	خواب غربي
	7	
                                                                                                                                  جمع کل : 8/185 متر مربع

بخش پانزدهم- فرش موزائيک

شرح عمليات :
فرش کف با موزائيک سيماني ساده به ابعاد 25*25 سانتيمتر با 5/2 سانتيمتر ماسه ي نرم زير آن و دوغاب ريزي .
شماره فهرست بها : 210101

	واحد : متر مربع		
ملاحظات	کلي	جزئي	سطح
	عرض
هر مورد
m	طول
هر مورد
m	تعداد قسمت هاي مشابه	شرح عمليات	رديف	
	
60
	-	54	5.85Avg	10.23	1
	کف حيا ط	1	
	63	-	63	9	7	1	کف پارکينگ	2	
	10.5	-	3.5	1.35	2.55	3	کف انبارها	3	
	10.8	-	10.8	2.4	4.5	1	کف ورودي
پله کان پارکينگ	4	
                                                                                                                                  جمع کل : 3/144 متر مربع                              

بخش شانزدهم- کارهاي سنگي با سنگ پلاک

شرح عمليات :
تهيه و نصب سنگ پلاک مرمريت گوهره ي خرم آباد در سطوح افقي با ضخامت 2 سانتيمتر .
شماره فهرست بها : 220301
تذکر : ضخامت سنگهاي روي پله 4 سانتيمتر طبق نقشه هاي اجرايي در نظر گرفته مي شوند .

کف پله ها 

	واحد : متر مربع		
ملاحظات	کلي	جزئي	سطح
	عرض
هر مورد
m	طول
هر مورد
m	تعداد قسمت هاي مشابه	شرح عمليات	رديف	
ضخامت سنگ
4cm	
16.56
	-	.36	.3	1.2	
46
	سنگ روي پله	1	
                                                                                                                                  جمع کل : 56/16 متر مربع

کف پاگرد و کف پنجره ها
	واحد : متر مربع		
ملاحظات	کلي	جزئي	سطح
	عرض
هر مورد
m	طول
هر مورد
m	تعداد قسمت هاي مشابه	شرح عمليات	رديف	
ضخامت سنگ
2cm	
15.84
	-	2.64	2.4	1.1	
6
	سنگ کف پاگرد	1	
	-2.16	-	.36	.3	1.2	6	سنگ کف پله کسر مي شود	2	
	7.2	.45	.45	.3	1.5	16	سنگ کف پنجره
(تيپ 1)	3	
	1.8	.6	.6	.3	2	3	سنگ کف پنجره
( تيپ 2)	3	
		                                                                                                                                   جمع کل : 68/22 متر مربع

شرح عمليات :
تهيه ونصب سنگ پلاک مرمريت گوهره ي خرم آباد در سطوح افقي با ضخامت 2 سانتيمتر .
شماره فهرست بها : 220301

سنگ هاي قائم پيشاني پله 
	واحد : متر مربع		
ملاحظات	کلي	جزئي	سطح
	عرض
هر مورد
m	طول
هر مورد
m	تعداد قسمت هاي مشابه	شرح عمليات	رديف	
ضخامت سنگ
2cm	
9.9
	-	.216	.18	1.2	
46
	سنگ پيشاني  پله	1	
                                                                                                                                  جمع کل : 93/9 متر مربع      

بخش هفدهم-  برش و نصب شيشه 

شرح عمليات :
تهيه ونصب شيشه ي 6 ميليمتري ساده
شماره فهرست بها : 240105

	واحد : متر مربع		
ملاحظات	کلي	جزئي	مساحت
	عرض
مورد
m	طول
مورد
m	تعداد قسمت هاي مشابه	شرح عمليات	رديف	
	
36
	-	2.25	1.5	1.5	
16
	
پنجره هاي تيپ 1
	1	
	9	-	3	1.5	2	3	
پنجره هاي تيپ 2
	2	
	1.5	-	.25	.5	.5	6	
پنجره هاي تيپ 3
	3	
	4.5	-	.5	.5	1	9	پنجره هاي بالاي در تيپ 2	4	
	2.1	-	.35	.5	.7	6	پنجره هاي بالاي در تيپ 3	5	
جمع کل : 1/ 53 متر مربع

بخش هيجدهم- رنگ آميزي

شرح عمليات :
تهيه مصالح و اجراي رنگ پلاستيک کامل روي اندود گچي ديوار ها و سقفها .
شماره فهرست بها : 250502
نقل از بخش اندود کاري با گچ و خاک (صفحه 51) و اندود کاري با گچ و خاک در سقفها ( صفحه 52)
جمع کل : 1091 متر مربع

بخش نوزدهم- حمل و نقل

* محاسبات مقادير سيمان : (با 6 در صد اتلاف سيمان)
1- سيمان براي تهيه ي بتن و قطعات پيش ساخته ي بتني ( تير ها و ستون ها ) با استثناي بلوکهاي پيش ساخته (عيار 350 کيلو گرم در متر مکعب )
75.4 * 350 * 1.06 = 28 Ton

2- سيمان براي تهيه ي بتن مگر (100 کيلو گرم در متر مکعب) :                                                                                                                    72/0 = 06/1 * 100 * 76/6

3- مقدار سيمان در سقف تيرچه و بلوک به ضخامت 30 سانتيمتر (مساحت سقف = 290 متر مربع وعيار سيمان 300 کيلو گرم در متر مکعب) :                                                                                                                                                                                                                                                6/23 = 06/1 * 250 * ( 3/0 * 290 )

4- ملات هاي فرش کف سنگکاري و کاشي کاري و ... ( حجم ملات مصرفي در هر متر مربع 03/0 متر مکعب و عيار سيمان 150 کيلو گرم در متر مکعب) :
اندود کاري:      تن  16/0 = 06/1 * 150 * 99/0
کفهاي موزائيک و سراميک و سنگي ( 30 ليتر ملات به طور متوسط در هر متر مربع 03/0 متر مکعب و عيار سيمان 150 کيلوگرم در متر مکعب) :
اندود کاري :     تن 16/0 = 06/1 * 150 * 99/0
کفهاي موزائيک و سراميک و سنگي ( 30 ليتر ملات به طور متوسط در هر متر مربع) :     تن 5/2 = 06/1 * 150 * 03/0 * 525

جمع کل سيمان مورد نياز (حمل از لوشان تا رشت) :4/54 تن

*  مقا دير آهن آلات با 5 درصد تلفات
1- آرماتور هاي لازم : تن 05/11 = 05/1 * 52/10 
2- تير آهن : تن 03/ 2 = 05/1 * 935/1
3- درهاي فولادي پارکينگ : تن 391/0 = 05/1 * 372/0

جمع کل آهن آلات مصرفي : 47/13 تن (5/13 تن)

جمع کل آهن آلات و سيمان : 68 تن

* مقادير آجر : 

1-  ديوار يک ونيم آجره ي بيروني ( حجم کل آجر کاري = 79 متر مکعب )
2- ديوار يک آجره ي داخلي (مساحت آجرکاري 2/233 حجم کل آجر کاري = 5/25 مترمکعب )

وزن کل آجرمورد نياز: تن 6/130 = 25/1 * 5/104

فاصله ي حمل سيمان ( از لوشان )  حدود 90 کيلو متر 
فاصله ي حمل آجر ( از تهران ) حدود 325 کيلو متر 
فاصله حمل آه ( از اصفهان ) حدود 735 کيلو متر

شرح عمليات :
حمل آهن آلات و سيمان پاکتي نسبت به مازاد بر 30 کيلو متر تا فاصله ي 75 کيلو متر 
شماره فهرست بها : 280101
ملا حظات	مقدار	واحد	شماره فهرست بها	شرح عمليات	رديف	
وزن سيمان
54.4 تن	
3264
	تن- کيلومتر	
280101
	حمل سيمان تا فاصله ي 60
کيلو متر از
لوشان	
1
	
وزن آهن
13.6 تن	1020	تن- کيلومتر	280101	حمل آهن آلات تا فا صله ي 75 کيلو متر از اصفهان	2	
                                                                                                                                 جمع کل : 4284 تن- کيلومتر

شرح عمليات : 
حمل آهن آلات و سيمان پاکتي نسبت به مازاد بر 75 کيلو متر تا فاصله ي 150 کيلو متر
شماره فهرست بها : 280102
 
ملا حظات	مقدار	واحد	شماره فهرست بها	شرح عمليات	رديف	
وزن آهن
13.6 تن	
2040
	تن- کيلومتر	
280102
	حمل آهن آلات تا فاصله ي 150 کيلو متر مازاد از اصفهان	
1
	
                                                                                                                                  جمع کل : 2040 تن- کيلومتر                          

شرح عمليات :
حمل آهن آلات و سيمان پاکتي نسبت به مازاد بر 150 کيلو متر تا فاصله ي 300 کيلو متر 
شماره فهرست بها : 280103
ملا حظات	مقدار	واحد	شماره فهرست بها	شرح عمليات	رديف	
وزن آهن
13.6 تن	4080
	تن- کيلومتر	280103	حمل آهن آلات تا فا صله ي 300 کيلو متر مازاد از اصفهان	1	
                                                                                                                                  جمع کل : 4080 تن- کيلومتر

شرح عمليات : 
حمل آهن آلات و سيمان پاکتي نسبت به مازاد 300 کيلومتر تا فاصله ي 450  کيلومتر
شماره فهرست بها : 280104
ملا حظات	مقدار	واحد	شماره فهرست بها	شرح عمليات	رديف	
وزن آهن
13.6 تن	
2856
	تن- کيلومتر	280104	حمل آهن آلات تا فا صله ي 210 کيلو متر مازاد ازاصفهان	1	
                                                                                                                                  جمع کل : 2856 تن- کيلومتر                                                                  

شرح عمليات : 
حمل آجر و مصالح سنگي نسبت به مازاد بر 30 کيلو متر تا فاصله ي 75 کيلو متر
شماره فهرست بها : 280204
ملا حظات	مقدار	واحد	شماره فهرست بها	شرح عمليات	رديف	
وزن آجر
130.6  تن	
9795
	تن- کيلومتر	
280201
	حمل آجر تا فاصله ي 75 کيلومتر مازاد
از تهران	1	
                                                                                                                                  جمع کل : 9795 تن- کيلومتر      

شرح عمليات :
حمل آجر و مصالح سنگي نسبت به مازاد بر 75 کيلو متر تا فاصله ي 150 کيلو متر
شماره فهرست بها : 280202
ملا حظات	مقدار	واحد	شماره فهرست بها	شرح عمليات	رديف	
وزن آجر
130.6  تن	
19590
	تن- کيلومتر	
280202
	حمل آجر تا فاصله ي 150 کيلومتر مازاد
از تهران	1	
                                                                                                                                  جمع کل : 19590 تن- کيلومتر                                                                    

شرح عمليات :
حمل آجر و مصالح سنگي نسبت به مازاد بر 150 کيلو متر تا فاصله ي 300 کيلو متر
شماره فهرست بها : 280203
ملا حظات	مقدار	واحد	شماره فهرست بها	شرح عمليات	رديف	
وزن آجر
130.6  تن	
11754
	
تن- کيلومتر
	280203	حمل آجر تا فاصله ي 90 کيلو متر مازاد
از تهران	1	
                                                                                                                                   جمع کل : 11754 تن- کيلومتر

خلاصه متره

بخش دوم- عمليات خاکبرداري با دست

ملا حظات	مقدار	واحد	شماره فهرست بها	شرح عمليات	رديف	
نقل از صفحه ي 2	
23.28
	متر مکعب	
020102
	خاکبرداري پي کني گودبرداري و کانال کني در زمينهاي نرم تا عمق دو متر وريختن خاکهاي کنده شده به کنار محلهاي مربوطه	1	
نقل از صفحه ي 3	15.52	متر مکعب	020103	خاکبرداري پي کني گودبرداري و کانال کني در زمينهاي سخت تا عمق دو متر وريختن خاکهاي کنده شده به کنار محلهاي مربوطه	2	

بخش سوم- عمليات خاکبرداري با ماشين

ملا حظات	مقدار	واحد	شماره فهرست بها	شرح عمليات	رديف	

نقل از صفحه ي 4
	
93.24
	متر مکعب	
030103
	خاکبرداري در زمينهاي نرم با هر وسيله ي مکانيکي و حمل مواد حاصل از خاکبرداري تا فاصله 20 متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن .	1	

نقل از صفحه ي 4
	
62.16
	متر مکعب	
030104
	خاکبرداري در زمينهاي نرم با هر وسيله ي مکانيکي و حمل مواد حاصل از خاکبرداري تا فاصله 20 متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن .	2	

بخش چهارم- قالب بندي چوبي

ملا حظات	مقدار	واحد	شماره فهرست بها	شرح عمليات	رديف	

نقل از صفحه ي 5	

58.96

متر مربع
	
050101
	تهيه ي وسايل قالب بندي با استفاده از تخته نراد خارجي د رپي ها  و شناژهاي مربوط به آن .	1	

نقل از صفحات
6 تا 7
	
183.2
	
متر مربع
	
050301
	تهيه ي وسايل قالب بندي با استفاده از تخته نراد خارجي در ستون ها و شناژ هاي قائم با مقطع چهار ضلعي تا ارتفاع 
حداکثر5/3 متر	2	
نقل از صفحات
8 تا 9	233.6	
متر مربع
	050501	تهيه ي وسايل قالب بندي با استفاده از تخته نراد خارجي در تير هاي بتني تا ارتفاع5/3 متر	3	

بخش پنجم- کارهاي فولادي با ميلگرد

ملا حظات	مقدار	واحد	شماره فهرست بها	شرح عمليات	رديف	

نقل از صفحات
12 تا 16
	
2040
	
کيلو گرم
	
070201
	تهيه بريدن و خم کردن ميله گردهاي آجدار از نوع
A2
به قطر 10 ميليمتر براي بتن مسلح با سيم پيچي لازم	1	

نقل از صفحات
17 تا 25
	
7821.2
	
کيلو گرم
	
070202
	تهيه بريدن و خم کردن ميله گردهاي آجدار از نوع
A2
به قطر 12 تا 18  ميليمتر براي بتن مسلح با سيم پيچي لازم
	2	

نقل از صفحه ي26	658.4	

کيلو گرم

070203
	تهيه بريدن و خم کردن ميله گردهاي آجدار از نوع
A2
به قطر 20 ميليمترو بيشتر براي بتن مسلح با سيم پيچي لازم	3	

بخش ششم-  بتن درجا

ملا حظات	مقدار	واحد	شماره فهرست بها	شرح عمليات	رديف	
نقل از صفحات
27 تا 29	
75.4
	
متر مکعب
	
080106
	تهيه و اجراي بتن با شن و ماسه ي شسته طبيعي يا شکسته با 350 کيلو گرم سيمان در متر مکعب بتن	1	

نقل از صفحه ي30
	
6.76
	
متر مکعب
	
080101
	تهيه و اجراي بتن با شن و ماسه ي شسته طبيعي با 100 کيلو گرم سيمان در متر مکعب بتن	2	

بخش هفتم- کارهاي فولادي سنگين (راه پله)

ملا حظات	مقدار	واحد	شماره فهرست بها	شرح عمليات	رديف	

نقل از صفحه ي31
	
1935

کيلو گرم

	
090206
	تهيه ساخت و نصب تير پله از تير آهن يا ناوداني با تمام عمليات برش کاري جوشکاري و اتصال هاي مربوط همراه با وصله هاي لازم براي اتصال به عضو ديگر .	1	
نقل از صفحه ي32	372
	کيلو گرم
	-
	آهن مصرفي در پارکينگ *	2	

بخش هشتم- سقفهاي سبک طبقات

ملا حظات	مقدار	واحد	شماره فهرست بها	شرح عمليات	رديف	

نقل از صفحه ي33
	
290

متر مربع

100103
	اجراي سقف بتني به ضخامت 30 سانتيمتر تيرچه و بلوک تو خالي بتني شامل تهيه ي تمام مصالح به استثناي ميله گرد و همچنين تهيه ي تجهيزات لازم به طور کامل .	1	

بخش نهم- آجرکاري و شفته ريزي

ملا حظات	مقدار	واحد	شماره فهرست بها	شرح عمليات	رديف	
نقل از صفحات
34 تا37	
79
	
متر مکعب
	
110201
	آجرکاري با آجر فشاري به ضخامت 5/1 آجر و بيشتر و ملات ماسه سيمان1:6	1	
نقل از صفحات
38 تا 40	233.2	متر مربع	
110205
	ديوار يک آجره با آجر فشاري و ملات ماسه سيمان 1:6	2	

بخش دهم- عايق کاري رطوبتي

ملا حظات	مقدار	واحد	شماره فهرست بها	شرح عمليات	رديف	
نقل از صفحات
41 و42	
107.73
	
متر مربع
	
130102
	عايقکاري با دو قشر اندود قير و يک لايه گوني براي سطوح حمام ها و توالت ها و روي پي ها	
1
	
نقل از صفحه ي43	28.5	
متر مربع
	
130103
	عايقکاري با دو قشر اندود قير و يک لايه گوني براي ساير سطوح	2	

بخش يازدهم- کارهاي آلومينيمي

ملا حظات	مقدار	واحد	شماره فهرست بها	شرح عمليات	رديف	
نقل از صفحات
44 و45	
396
	
کيلو گرم
	
170101
	تهيه ساخت و نصب در و پنجره آلومينيمي که در آن از ميله گرد آهني استفاده شده است	1	

بخش دوازدهم- اندود کاري

ملا حظات	مقدار	واحد	شماره فهرست بها	شرح عمليات	رديف	
نقل از صفحات
46 تا 51	
755
	
متر مربع
	180202	اندود گچ و خاک به ضخامت حدود 5/2 سانتيمتر روي سطوح قائم	1	
نقل از صفحه ي52	346	
متر مربع
	180203	اندود گچ و خاک به ضخامت حدود 5/2 سانتيمتر زير سقفها	2	
نقل از صفحه ي53	755	
متر مربع
	180204	سفيد کاري روي سطوح قائم که در آن ابزار گچي ساده (چفت) به کار رفته و پرداخت آن با گچ کشته باشد	3	
نقل از صفحه ي53	358	
متر مربع
	180205	سفيد کاري زير سقفها که در آن ابزار گچي ساده (چفت) به کار رفته و پرداخت آن با گچ کشته باشد	4	
نقل از صفحه ي53	74.7	
متر مربع
	180303	اندود سيماني به ضخامت حدود 1 سانتيمتر بر روي سطوح قائم با ملات ماسه سيمان1:4	5	
نقل از صفحه ي54	12.2	
متر مربع
	180308	اندود سيماني به ضخامت حدود 2 سانتيمتر بر روي سطوح افقي با ملات ماسه سيمان1:4	6	

بخش سيزدهم- کارهاي چوبي

ملا حظات	مقدار	واحد	شماره فهرست بها	شرح عمليات	رديف	

نقل از صفحه ي55
	
130.8
	
مترطول
	
190103
	تهيه و نصب چهار چوب از چوب داخلي به ابعاد اسمي 6*12 سانتيمتر يا مقطع معادل آن با تمام مشتيهاي پيش بيني شده و زهوار لازم براي کتيبه .	1	

نقل از صفحه ي56
	37.44	
متر مربع
	
190201
	تهيه و ساخت کلاف چوبي به ابعاد 8/3*6
سانتيمتر يا مقطع معادل آن با چوب داخلي همراه با دو قيد چوبي به ابعاد 8/3*6 يا مقطع معادل آن به طول 20 سانتيمتر براي نصب قفل .	2	

نقل از صفحه ي56
	37.44	
متر مربع
	
190401
	تهيه و نصب پوشش دو روي در با
تخته ي سه لايي داخلي به ضخامت 4 ميليمتر با پرس کردن 	3	

نقل از صفحه ي57
	45.6	
متر مربع
	
190701
	تهيه ساخت و نصب چهار چوب کمد و گنجه از چوب نراد خارجي به ابعاد اسمي 7*5 سانتيمتر يا مقطع معادل آنها با تمام مشتيهاي پيش بيني شده .	4	

نقل از صفحه ي57
	4.32	
متر مربع
	
190702
	تهيه ساخت در کمد و گنجه از نئوپان به ضخامت 18 ميليمتر و نصب زهوار چوبي در محيط آن به ابعاد 2*8/1 سانتيمتر .	5	

نقل از صفحه ي58
	
2.32
	
متر مکعب
	
191301
	تهيه ونصب خرپاي چوبي با چهار تراش از چوب داخلي شامل کش و لنگ (کلافهاي تحتاني و فوقاني خرپا) چوب دار و ساير اعضاي مشابه به استثناي تخته کوبيها بر حسب حجم چوب نصب شده .	6	

بخش چهاردهم- کاشي و سراميک

ملا حظات	مقدار	واحد	شماره فهرست بها	شرح عمليات	رديف	
نقل از صفحه ي59	
11.4
	
متر مربع
	
200102
	کاشي کاري سطوح افقي با کاشي لعابي به ابعاد 15*15 سانتيمتر 	1	
نقل از صفحات
60 و61	
142.7
	
متر مربع
	
200202
	کاشي کاري سطوح قائم با کاشي لعابي به ابعاد 15*15 سانتيمتر 	2	
نقل از صفحه ي62	185.58	
متر مربع
	
200706
	تهيه و نصب کاشي کفي (سراميک) به ابعاد 20*20 سانتيمتر	3	

بخش پانزدهم- فرش موزائيک

ملا حظات	مقدار	واحد	شماره فهرست بها	شرح عمليات	رديف	
نقل از صفحه ي63	
144.3
	
متر مربع
	
210101
	فرش کف با موزائيک سيماني ساده به ابعاد 25*25 سانتيمتر با 5/2 سانتيمتر ماسه ي نرم زير آن و دوغآب ريزي .	1	

بخش شانزدهم کارهاي سنگي با سنگ پلاک

ملا حظات	مقدار	واحد	شماره فهرست بها	شرح عمليات	رديف	

نقل از صفحه ي64
	
16.56
	
متر مربع
	
220301
	تهيه و نصب سنگ پلاک مرمريت
گوهره ي خرم آباد در سطوح افقي با ضخامت 2 سانتيمتر
(به علاوه ي 2 سانتيمتر)	1	

نقل از صفحه ي65
	
22.68
	
متر مربع
	
220301
	تهيه و نصب سنگ پلاک مرمريت
گوهره ي خرم آباد در سطوح افقي با ضخامت 2 سانتيمتر	2	

نقل از صفحه ي65
	9.93	
متر مربع
	
220301
	تهيه و نصب سنگ پلاک مرمريت
گوهره ي خرم آباد در سطوح افقي با ضخامت 2 سانتيمتر	3	

بخش هفدهم- برش و نصب شيشه

ملا حظات	مقدار	واحد	شماره فهرست بها	شرح عمليات	رديف	

نقل از صفحه ي66
	
53.1
	
متر مربع
	
240105
	
تهيه و نصب شيشه ي 6 ميليمتري ساده
	1	

بخش هيجدهم- رنگ آميزي

ملا حظات	مقدار	واحد	شماره فهرست بها	شرح عمليات	رديف	

نقل از صفحه ي67
	
1091
	
متر مربع
	
250502
	تهيهي مصالح و اجراي رنگ پلاستيک کامل روي اندود گچي ديوارها و سقفها	1	

بخش نوزدهم- حمل ونقل

ملا حظات	مقدار	واحد	شماره فهرست بها	شرح عمليات	رديف	
نقل از صفحه ي69	
4280
	تن- کيلومتر	
280101
	حمل آهن و سيمان پاکتي نسبت به مازاد بر 30 کيلو متر تا فاصله ي 75 کيلو متر	1	
نقل از صفحه ي69	2040	تن- کيلومتر	280102	حمل آهن و سيمان پاکتي نسبت به مازاد بر 75 کيلو متر تا فاصله ي 150 کيلو متر	2	
نقل از صفحه ي70	4080	تن- کيلومتر	280103	حمل آهن و سيمان پاکتي نسبت به مازاد بر 150 کيلو متر تا فاصله ي 300 کيلو متر	3	
نقل از صفحه ي70	2856	تن- کيلومتر	280104	حمل آهن و سيمان پاکتي نسبت به مازاد بر 300 کيلو متر تا فاصله ي 450 کيلو متر	4	
نقل از صفحه ي70	9795	تن- کيلومتر	280201	حمل آجر و مصالح سنگي نسبت به مازاد بر 30 کيلو متر تا فاصله ي 75 کيلومتر	5	
نقل از صفحه ي70	19590	تن- کيلومتر	280202	حمل آجر و مصالح سنگي نسبت به مازاد بر 75 کيلو متر تا فاصله ي 150 کيلومتر	6	
نقل از صفحه ي71	11754	تن- کيلومتر	280203	حمل آجر و مصالح سنگي نسبت به مازاد بر 150 کيلو متر تا فاصله ي 300 کيلومتر	7	

محاسبات مالي

بخش دوم-  عمليات خاکبرداري

ملاحظات	قيمت کل	قيمت واحد	مقدار	واحد	شماره فهرست بها	شرح عمليات	رديف
	
نقل از صفحه ي 72 ي خلا صه متره	66348	2850	23.28	متر مکعب	020102	خاکبرداري پي کني گودبرداري و کانال کني در زمينهاي نرم تا عمق دو متر و ريختن خاکهاي کنده شده به کنارمحلهاي مربوطه	1	
نقل از صفحه ي 72 ي خلا صه متره	1142364.8	7240	15.52	متر مکعب	020103	خاکبرداري پي کني گودبرداري و کانال کني در زمينهاي سخت تا عمق دو متر و ريختن خاکهاي کنده شده به کنارمحلهاي مربوطه	2	
     جمع فصل : 8/8712 17

بخش سوم- عمليات خاکبرداري با ماشين

ملاحظات	قيمت کل	قيمت واحد	مقدار	واحد	شماره فهرست بها	شرح عمليات	رديف
	
نقل از صفحه ي 72 ي خلا صه متره	39160.8	420	93.24	متر مکعب	030103	خاکبرداري در زمينهاي نرم با هر وسيله ي مکانيکي و حمل مواد حاصل از خاکبرداري تا فاصله ي 20 متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن .
	1	
نقل از صفحه ي 72 ي خلا صه متره	42268.8	680	62.16	متر مکعب	030104	خاکبرداري در زمينهاي سخت با هر وسيله ي مکانيکي و حمل مواد حاصل از خاکبرداري تا فاصله ي 20 متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن .
	2	
      جمع فصل : 6/81429                 

بخش چهارم- قالب بندي چوبي

ملاحظات	قيمت کل	قيمت واحد	مقدار	واحد	شماره فهرست بها	شرح عمليات	رديف
	
نقل از صفحه ي 73 ي خلا صه متره	1173304	19900	58.96	متر مربع	050101	تهيه ي وسايل قالب بندي با استفاده از تخته ي نراد خارجي در پي ها و شناژهاي مربوط به آن .	1	
نقل از صفحه ي 73 ي خلا صه متره	6375360	34800	183.2	متر مربع	050301	تهيه ي وسايل قالب بندي با استفاده از تخته ي نراد خارجي در ستون ها و شناژهاي قائم با مقطع چهار ضلعي تا ارتفاع حداکثر 5/3 متر .	2	
نقل از صفحه ي 73 ي خلا صه متره	9787740	41900	233.6	متر مربع	050501	تهيه ي وسايل قالب بندي با استفاده از تخته ي نراد خارجي در تير هاي بتني تا ارتفاع حداکثر 5/3 متر .	3	
     جمع فصل : 17666504

بخش پنجم- کارهاي فولادي با ميلگرد

ملاحظات	قيمت کل	قيمت واحد	مقدار	واحد	شماره فهرست بها	شرح عمليات	رديف
	
نقل از صفحه ي 73 ي خلا صه متره	5120400	2510	2040	کيلو گرم	070201	تهيه بريدن و خم کردن ميله گردهاي آجدار از نوع 2 به قطر تا 10 ميليمتر براي بتن مسلح با سيم پيچي لازم .	1	
نقل از صفحه ي 73 ي خلا صه متره	16189884	2070	7821.2	کيلو گرم	070202	تهيه بريدن و خم کردن ميله گردهاي آجدار از نوع 2 به قطر تا 12 تا 18 ميليمتر براي بتن مسلح با سيم پيچي لازم .	2	
نقل از صفحه ي 73 ي خلا صه متره	1237792	1880	658.4	کيلو گرم	070203	تهيه بريدن و خم کردن ميله گردهاي آجدار از نوع 2 به قطر تا 20 ميليمتر و بيشتر براي بتن مسلح با سيم پيچي لازم .	3	
    جمع فصل : 22548076

بخش ششم- بتن درجا

ملاحظات	قيمت کل	قيمت واحد	مقدار	واحد	شماره فهرست بها	شرح عمليات	رديف
	
نقل از صفحه ي 74 ي خلا صه متره	7690800	102000	75.4	متر مکعب	080106	تهيه و اجراي بتن با شن و ماسه طبيعي يا شکسته با 350 کيلوگرم سيمان در متر مکعب .	1	
نقل از صفحه ي 74 ي خلا صه متره	415064	61400	6.76	متر مکعب	080101	تهيه و اجراي بتن با شن و ماسه طبيعي يا شکسته با 100 کيلوگرم سيمان در متر مکعب .	2	
     جمع فصل : 8105864

بخش هفتم- کارهاي فولادي سنگين (راه پله)

ملاحظات	قيمت کل	قيمت واحد	مقدار	واحد	شماره فهرست بها	شرح عمليات	رديف
	
نقل از صفحه ي 74 ي خلا صه متره	5050350	2610	1935	متر مکعب	090206	تهيه ساخت و نصب تير پله آهن يا ناوداني با تمام عمليات برش کاري جوشکاري و اتصالها همراه با وصله هاي لازم براي اتصال به عضو ديگر .	1	
نقل از صفحه ي 74 ي خلا صه متره	818400	2200	372	متر مکعب	*	آهن مصرفي در در پارکينگ *	2	
     جمع فصل :   5050350
     آيتم ستاره دار : 818400 *

بخش هشتم-  سقفهاي سبک طبقات

ملاحظات	قيمت کل	قيمت واحد	مقدار	واحد	شماره فهرست بها	شرح عمليات	رديف
	
نقل از صفحه ي 74 ي خلا صه متره	9715000	33500	290	متر مربع	100103	اجراي سقف بتني به ضخامت 30 سانتيمتر تيرچه و بلوک تو خالي بتني شامل تهيه ي تمتم مصالح به استثناي ميله گرد و همچنين تهيه ي تجهيزات لازم به طور کامل .	1	
    جمع فصل : 9715000

بخش نهم-  آجر کاري و شفته ريزي

ملاحظات	قيمت کل	قيمت واحد	مقدار	واحد	شماره فهرست بها	شرح عمليات	رديف
	
نقل از صفحه ي 75 ي خلا صه متره	8295000	105000	7	متر مکعب	110201	آجر کاري با آجر فشاري به ضخامت 5/1 آجر و بيشتر وملات ماسه سيمان 1:6	1	
نقل از صفحه ي 75 ي خلا صه متره	5410240	23200	233.2	متر مربع	110205	ديوار يک آجره با آجر فشاري و ملات ماسه سيمان 1:6	2	
     جمع فصل : 27410480

بخش دهم-  عايق کاري رطوبتي

ملاحظات	قيمت کل	قيمت واحد	مقدار	واحد	شماره فهرست بها	شرح عمليات	رديف
	
نقل از صفحه ي 75 ي خلا صه متره	672235.2	6240	107.73	متر مربع	130102	عايقکاري رطوبتي با دو قشر اندود قير و يک لايه گوني براي تمام سطوح حمامها و توالتها و روي پي ها .	1	
نقل از صفحه ي 75 ي خلا صه متره	162450
	5700
	28.5
	متر مربع	130103	عايقکاري رطوبتي با دو قشر اندود قير و يک لايه گوني براي ساير سطوح .	2	
     جمع فصل : 2/834685

بخش يازدهم-  کارهاي آلومينيمي

ملاحظات	قيمت کل	قيمت واحد	مقدار	واحد	شماره فهرست بها	شرح عمليات	رديف
	
نقل از صفحه ي 75 ي خلا صه متره	6573600	16600	396	کيلو گرم	170101	تهيه ساخت و نصب در و پنجره آلومينيمي که در آن از ميله گرد آهني استفاده شده است .	1	
     جمع فصل : 6573600

بخش دوازدهم-  اندود کاري

ملاحظات	قيمت کل	قيمت واحد	مقدار	واحد	شماره فهرست بها	شرح عمليات	رديف
	
نقل از صفحه ي 76 ي خلا صه متره	2416000	3200	755	متر مربع	180202	اندود گچ و خاک به ضخامت حدود 5/2 ستانتيمتر روي سطوح قائم .	1	
نقل از صفحه ي 76 ي خلا صه متره	1339020	3870	346	متر مربع	180203	اندود گچ و خاک به ضخامت حدود 5/2 سانتيمتر بر روي سقفها .	2	
نقل از صفحه ي 76 ي خلا صه متره	1653405	2190	755	متر مربع	180204	سفيد کاري روي سطوح قائم که در آن ابزار گچي ساده (چفت) به کار رفته و پرداخت آن با گچ کشته باشد .	3	
نقل از صفحه ي 76 ي خلا صه متره	1016720	2840	358	متر مربع	180205	سفيد کاري روي سطوح سقفها که در آن ابزار گچي ساده (چفت) به کار رفته و پرداخت آن با گچ کشته باشد .	4	
نقل از صفحه ي 76 ي خلا صه متره	218771	2930	74.7	متر مربع	180303	اندود سيماني به ضخامت حدود 1 سانتيمتر روي سطوح قائم با ملات ماسه سيمان 1:4	5	
نقل از صفحه ي 76 ي خلا صه متره
	41602	3410	12.2	متر مربع	180308	اندود سيماني به ضخامت حدود 2 سانتيمتر روي سطوح افقي با ملات ماسه سيمان 1:4	6	
     جمع فصل : 6685663

بخش سيزدهم-  کارهاي چوبي

ملاحظات	قيمت کل	قيمت واحد	مقدار	واحد	شماره فهرست بها	شرح عمليات	رديف
	
نقل از صفحه ي 77 ي خلا صه متره	1818120	13900	130.8	متر طول	190103	تهيه و نصب چهار چوب از چوب داخلي به ابعاد اسمي 6*12 سانتيمتر يا مقطع معادل آن با تمام مشتيهاي پيش بيني شده و زهوار لازم براي کتيبه .	
1
	
نقل از صفحه ي 77 ي خلا صه متره	509184	13600	37.44	متر مربع	190201	تهيه و ساخت کلاف در چوبي به ابعاد 8/3*6 سانتيمتر يا مقطع معادل آن با چوب داخلي همراه با دو قيد چوبي به ابعاد 8/3*6 يا مقطع معادل آن به طول 20 سانتيمتر براي نصب قفل 	2	
نقل از صفحه ي 77 ي خلا صه متره	1295424	34600	37.44	متر مربع	190401	تهيه و نصب پوشش دو روي در با تخته ي سه لايي داخلي به ضخامت 4 ميليمتر با پرس کردن .	3	
نقل از صفحه ي 77 ي خلا صه متره	403560	8850	45.6	متر طول	190701	تهيه ساخت و نصب چهار چوب کمد و گنجه از چوب نراد خارجي به ابعاد اسمي 7*5 سانتيمتر يا مقطع معادل آنها با تمام مشتيهاي پيش بيني شده .	4	
نقل از صفحه ي 77 ي خلا صه متره	96768	22400	4.32	متر مربع	190702	تهيه ساخت در کمد و گنجه از نئوپان به ضخامت 18 ميليمتر و نصب زهوار چوبي در محيط آن به ابعاد 2*8/1 سانتيمتر .	5	
نقل از صفحه ي 77 ي خلا صه متره	2765440	1192000	2.32	متر مکعب	191301	تهيه و نصب خرپاي چوبي با چهار تراش از چوب داخلي شامل کش و لنگ (کلافها بالا و پائين خرپا) لاپه شاخه تو حلقي رکاب و کلاف روي ديوار چوب دار و ساير اعضاي مشابه به استثناي تخته کوبيها بر حسب حجم چوب نصب شده .	6	
     جمع فصل : 6888496

بخش چهاردهم-  کاشي و سراميک

ملاحظات	قيمت کل	قيمت واحد	مقدار	واحد	شماره فهرست بها	شرح عمليات	رديف	
نقل از صفحه ي 78 ي خلا صه متره	342000	30000	11.4	متر مربع	200102	کاشي کاري سطوح افقي با کاشي لعابي به ابعاد 15*15 سانتيمتر .	1	
نقل از صفحه ي 78 ي خلا صه متره	4437970	31100	142.7	متر مربع	200202	کاشي کاري سطوح قائم با کاشي لعابي به ابعاد 15*15 سانتيمتر .	2	
نقل از صفحه ي 78 ي خلا صه متره	7664454	41300	185.58	متر مربع	200706	تهيه و نصب کاشي کفي (سراميک) به ابعاد 20*20 سانتيمتر.	3	
     جمع فصل : 12444424

بخش پانزدهم-  فرش موزائيک

ملاحظات	قيمت کل	قيمت واحد	مقدار	واحد	شماره فهرست بها	شرح عمليات	رديف	
نقل از صفحه ي 78 ي خلا صه متره	1746030	12100	144.3	متر مربع	210101	فرش کف با موزائيک سيماني ساده به ابعاد 25*25 سانتيمتر با 5/2 سانتيمتر ماسه ي نرم زير آن و دوغاب ريزي .	1	
     جمع فصل : 1746030  

بخش شانزدهم-  کارهاي سنگي با سنگ پلاک

ملاحظات	قيمت کل	قيمت واحد	مقدار	واحد	شماره فهرست بها	شرح عمليات	رديف	
نقل از صفحه ي 79 ي خلا صه متره	1022414.4	44100+17640	16.56	متر مربع	220301	تهيه و نصب سنگ پلاک مرمريت گوهره ي خرم آباد در سطوح افقي با ضخامت 2 سانتيمتر (به علاوه ي 2 سانتيمتر)	1	
نقل از صفحه ي 79 ي خلا صه متره	1000188
	44100
	22.68	متر مربع	220301	تهيه و نصب سنگ پلاک مرمريت گوهره ي خرم آباد در سطوح افقي با ضخامت 2 سانتيمتر	2	
نقل از صفحه ي 79 ي خلا صه متره	437913	44100	9.93	متر مربع	220301	تهيه و نصب سنگ پلاک مرمريت گوهره ي خرم آباد در سطوح افقي با ضخامت 2 سانتيمتر	3	
اضافه بها به رديف 4	17079.6	1720	9.93	متر مربع	220501	اضافه بها نسبت به رديفهاي تهيه و نصب سنگ پلاک در سطوح افقي در صورتيکه سنگهاي پلاک در سطوح قائم نصب شوند .	4	
      جمع فصل :  2477595

بخش هفدهم-  برش و نصب شيشه

ملاحظات	قيمت کل	قيمت واحد	مقدار	واحد	شماره فهرست بها	شرح عمليات	رديف	
نقل از صفحه ي 79 ي خلا صه متره	1709820	32200	53.1	متر مربع	240105	تهيه و نصب شيشه ي 6 ميليمتري ساده	1	
     جمع فصل : 1709820

بخش هيجدهم-  رنگ آميزي

ملاحظات	قيمت کل	قيمت واحد	مقدار	واحد	شماره فهرست بها	شرح عمليات	رديف	
نقل از صفحه ي 79 ي خلا صه متره	7571540	6940	1091	متر مربع	250502	تهيه ي مصالح رنگ پلاستيک کامل روي اندود گچي ديوارها و سقفها	1	
     جمع فصل  : 7571540

بخش نوزدهم-  حمل و نقل

ملاحظات	قيمت کل	قيمت واحد	مقدار	واحد	شماره فهرست بها	شرح عمليات	رديف	
نقل از صفحه ي 80 ي خلا صه متره	470800	110	4280	تن- کيلوگرم	280101	حمل آهن آلات و سيمان پاکتي نسبت به مازاد
بر 30 کيلومتر تا فاصله ي 75 کيلومتر	1	
نقل از صفحه ي 80 ي خلا صه متره	144840	71
	2040
	تن- کيلوگرم	280102	حمل آهن آلات و سيمان پاکتي نسبت به مازاد
بر 75 کيلومتر تا فاصله ي 150 کيلومتر	2	
نقل از صفحه ي 80 ي خلا صه متره	183600	45	4080	تن- کيلوگرم	280103	حمل آهن آلات و سيمان پاکتي نسبت به مازاد
بر 150 کيلومتر تا فاصله ي 300 کيلومتر	3	
نقل از صفحه ي 80 ي خلا صه متره	105672	37	2856	تن- کيلوگرم	280104	حمل آهن آلات و سيمان پاکتي نسبت به مازاد
بر 300 کيلومتر تا فاصله ي 450 کيلومتر	4	
نقل از صفحه ي 80 ي خلا صه متره	1077450	110	9795	تن- کيلوگرم	280201	حمل آجر و مصالح سنگي نسبت به مازاد
بر 30 کيلومتر تا فاصله ي 75 کيلومتر	5	
نقل از صفحه ي 80 ي خلا صه متره	139890	71	19590	تن- کيلوگرم	280202	حمل آجر و مصالح سنگي نسبت به مازاد
بر 75 کيلومتر تا فاصله ي 150 کيلومتر	6	
نقل از صفحه ي 80 ي خلا صه متره	528930	45	11754	تن- کيلوگرم	280203	حمل آجر و مصالح سنگي نسبت به مازاد
بر 150 کيلومتر تا فاصله ي 300 کيلومتر	7	
      جمع فصل : 7804364

ضرايب

جمع فصول با ضرايبي که ذيلا مي آيند محاسبه شده اند :
1- ضريب منطقه اي معادل 4%
2- ضريب بالاسري معادل 30%
3- ضريب تجهيز کارگاه معادل 4%
1+ ( 1*98+2*98+3*98 ) / ( 100*4*98 ) = 1.015                                                                                                                       4- ضريب طبقات براي سه طبقه :
ضريب پلوس براي برآورد بر مبناي فهرست بهاي 79 منظور نمي گردد .
1.04 * 1.04 * 1.3 * 1.015 = 1.427                                                                                                                                                ضريب کلي :( گرد شده 43/1 )
در مورد آيتمهاي ستاره دار فقط 30 در صد ضريب بالاسري اعمال مي گردد .

جمع فصل با ضرايب	جمع فصل بدون ضرايب	شماره ي فصل در فهرست بها	شماره ي  فصل	
255559.3	178712.8	دوم	دوم	
116444.3	81429.6	سوم	سوم	
24791200.7	17336504	پنجم	چهارم	
32243748.7	22548076	هفتم	پنجم	
11591385.5	8105864	هشتم	ششم	
7222000.5	5050350	نهم	هفتم	
13892450	9715000	دهم	هشتم	
39196986.4	27410480	يازدهم	نهم	
1193599.8	834685.2	سيزدهم	دهم	
9400248	6573600	هفدهم	يازدهم	
9560498.1	6685663	هيجدهم	دوازدهم	
9850549	6888496	نوزدهم	سيزدهم	
17795526.3	12444424	بيستم	چهاردهم	
2496822.9	1746030	بيست و يکم	پانزدهم	
3542960.85	2477595	بيست و دوم	شانزدهم	
2445042.6	1709820	بيست و چهارم	هفدهم	
10827302.2	7571540	بيست و پنجم	هيجدهم	
11160240.5	7804364	بيست و هشتم	نوزدهم	
1063920	818400	از بخش هفتم	آيتم هاي فاکتوري	
              جمع کل بدون ضرايب : 6/145162633  (ريال)                                                                                                                                                                              جمع کل با ضرايب : 207476174  (ريال)

تعديل

ضريب تعديل به صورت زير محاسبه مي شود :                                                                                                   ضريب تعديل =  95/0  * ( 1 -  شاخص مبنا / شاخص دوره ي انجام کار )  

مبلغ تعديل شده	ضريب تعديل	شاخص دوره انجام کار	شاخص مبنا	جمع فصل بدون ضرايب	شماره ي فصل در فهرست بها	شماره ي فصل	
178913	.100	143.7	130	178712.8	دوم	دوم	
9297.00	.114	148.2	132.3	81429.6	سوم
	سوم
	
1868804.4	.108	136.4	122.5	17336504	پنجم	چهارم	
349810.9	.015	106.7	105	22548076	هفتم	پنجم	
888527.4	.11	133.4	119.6	8105864	هشتم	ششم	
226273.3	.044	119.9	114.5	5050350	نهم	هفتم	
1404779.5	.14	140.8	122.2	9715000	دهم	هشتم	
2888775.6	.105	141.2	127.1	27410480	يازدهم	نهم	
35227.5	.042	124.6	119.3	834685.2	سيزدهم	دهم	
834717	.127	183.2	161.6	6573600	هفدهم	يازدهم	
584091.3	.087	141.3	129.4	6685663	هيجدهم	دوازدهم	
962642.4	.139	158.3	138	6888496	نوزدهم	سيزدهم	
1733008	.139	158	137.8	12444424	بيستم	چهاردهم	
212755.5	.121	146.9	130.2	1746030	بيست و يکم	پانزدهم	
185434.4	.075	156.1	144.7	2477595	بيست و دوم	شانزدهم	
148677	.087	175.3	160.6	1709820	بيست و چهارم	هفدهم	
479530.6	.063	148.8	139.5	7571540	بيست و پنجم	هيجدهم	
627854.8	.08	147.3	135.8	7804364	بيست و هشتم	نوزدهم	

          جمع کل : 9 /13455097

مابه التفاوت مصالح

مابه التفاوت قيمت مصالح (سيمان و آهن آلات) در سال 1379 نسبت به سال مبناي پيوست 1 از شرايط پيمان با ضرايب 14% به عنوان بالاسري محاسبه ميگردد :
                                                                                                                                              14/1 * ( قيمت پيوست 1- قيمت پيوست 2 ) * مقدار مصالح = مابه التفاوت 

مابه التفاوت
ريال	قيمت پيوست 1
ريال- کيلوگرم	قيمت پيوست 2
ريال- کيلوگرم	مقدار مصالح
کيلوگرم	نوع مصالح	
3708450	148	2270	1533	8F	
1226473.6	148	2270	507	10F	
1993595.5	148	2220	844	14F	
10386538.2	148	2220	4397.2	16F	
5888282.4	148	2150	2580	18F	
3628705.5	135	1780	1935	IPE 14	
7025172.5	18720	132000	54.4	سيمان تيپ يک لوشان	

جمع کل با ضرايب :                                                                                                                                                         3/95065281 = 43/1 * 7/66479217

جمع کل :   3/95065281  (ريال)( مابه التفاوت مصالح )

جمع کل : ( برآورد کل پروژه ) 2/315996553 ريال ( بدون احتساب قيمت زمين )
جمع کل : ( قيمت تمام شده ي هر واحد ) 4/105332184  ريال ( بدون احتساب قيمت زمين )
جمع کل : ( قيمت تمام شده پروژه بر حسب متر مربع براي هر واحد )  45/1063961 ريال ( بدون احتساب قيمت زمين )

اتمام پروژه : 31 شهريور ماه 1380